2026~2027년도

용인서울고속도로 시설물 안전점검 용역

설        계        서

2026. 1.

	목 차

Ⅰ. 설계 설명서	1

1. 용역의 목적	1

2. 용역의 범위	1

3. 용역 기간	2

4. 설계변경 조건	2

5. 기타 사항	3

Ⅱ. 과업 지시서	5

제1장 과업 수행 일반지침	5

1.1 계약상대자의 의무와 책임	5

1.2 주요업무의 사전승인	6

1.3 과업에 참여하는 기술인의 자격	6

1.4 과업수행 및 공정보고	6

1.5 보안 및 비밀유지	8

1.6 안전관리	8

1.7 하도급 관리	10

1.8 용어의 해석	11

1.9 업체 사후평가	11

제2장 과업 수행 세부사항	12

2.1 일반사항	12

2.2 각 단계별 과업 세부사항	12

2.3 보고서 작성	15

2.4 과업수행 적용기준	20

2.5 특기사항	20

2.6 성과품의 제출	20

※붙임 자료

1. 시설물 현황(제1종~제3종)	22

2. 시설물 현황(기타)	29

3. 별지서식(서식1~서식13)	36

Ⅰ. 설계 설명서

1. 용역의 목적

본 용역은 “시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법(이하 “시설물안전법”이라 한다.)“ 제11조에 따른 정기안전점검 및 정밀안전점검 용역으로써 고속도로 시설물의 재난 예방과 안전성 확보를 통한 공공의 안전을 확보하는데 그 목적이 있다.

2. 용역의 범위

가. 용 역 명 : 2026~2027년도 용인서울고속도로 시설물 안전점검 용역

나. 과업대상 : 영덕1교 등 181개소 (기타 시설물 93개소 포함)

구 분			대상 시설	과업 기간	비 고
‘26년	상반기	정기점검	제1종시설물 : 33개 제2종시설물 : 23개 제3종시설물 : 12개 기타시설물 : 93개	‘26.3.1~’26.6.20 (112일)	1차
		정밀점검	제2종시설물 : 20개
	하반기	정기점검	제1종시설물 : 16개 제2종시설물 : 43개 제3종시설물 : 12개 기타시설물 : 93개	‘26.8.1~’26.11.30 (122일)	2차
		정밀점검	제1종시설물 : 17개
‘27년	상반기	정기점검	제1종시설물 : 33개 제2종시설물 : 39개 제3종시설물 : 12개 기타시설물 : 93개	‘27.3.1~’27.6.20 (112일)	3차
		정밀점검	제2종시설물 : 4개
	하반기	정기점검	제1종시설물 : 17개 제2종시설물 : 43개 제3종시설물 : 12개 기타시설물 : 93개	‘27.8.1~’27.11.30 (122일)	4차
		정밀점검	제1종시설물 : 16개

※ 각 차수별 착수일은 우리 회사와 별도 협의하여 조정 가능

다. 과업 세부 내용

구 분	내 용
정밀안전점검	1) 자료수집 및 분석 2) 현장조사 및 시험 3) 상태평가 4) 보고서 작성 5) 종합평가 및 안전등급 지정 6) 보수․보강방안 및 유지관리방안 제시 7) 기타 정밀안전점검에 필요한 사항
정기안전점검 (제1~2종)	1) 자료수집 및 분석 2) 현장조사(외관조사) 3) 안전등급 검토*(FMS 미등재, 성과품 납품 시 반영) * 3종 정기안전점검 매뉴얼을 준용하여 전차 대비 차기 정밀점검 시 예상되는 안전등급 검토 등 4) 보고서 작성 5) 기타 정기안전점검에 필요한 사항
정기안전점검 (제3종)	1) 자료수집 및 분석 2) 현장조사(외관조사) 3) 상태평가, 안전등급 지정 4) 보고서 작성 5) 기타 정기안전점검에 필요한 사항
정기안전점검 (방음터널)	제3종 정기안전점검 수준과 동일하게 시행 (시설물안전법에 따라 3종시설물 지정 예정)
공통사항	현장조사결과 외관조사망도 작성(CAD)

3. 용역 기간

가. 본 용역의 용역기간은 계약일로부터 ‘27년 11월 30일까지로 한다.

나. 최종 성과품은 과업 종료 전에 제출하여 감독원의 검토를 득한 후 납품하여야 하며, 우리 회사의 요구 시 과업종료 전이라도 부분적으로 용역성과를 정리하여 제출하여야 한다.

4. 설계변경 조건

가. 다음의 경우에는 용역기간을 조정할 수 있다.

1) 천재지변 등 불가항력으로 과업 수행이 불가능한 때

2) 우리 회사의 방침변경 또는 지시에 따라 과업수행이 중단되었을 때

3) 계약 이후 당초 설계 수량이 현저하게 증․감되었을 때

4) 관계기관 및 지역주민의 민원 등으로 우리 회사가 인정한 사항에 의해 과업이 지연되었을 때

5) 기후불량(강우, 강설, 기온저하)일수가 10개년 평균 일수보다 많을 때

6) 산업안전보건법 제70조 제1항에 의한 경우

나. 본 용역을 수행함에 있어 우리 회사의 방침에 의하여 과업내용 변경, 추가조사 항목에 대한 수량 변경 시 실제에 맞추어 설계변경 한다.

다. 용역대가의 조정은 “엔지니어링사업대가의 기준 제5조(대가의 조정)(산업통상자원부 고시)”를 적용한다.

라. 점검장비(굴절차, 고소차 등), 교통안전관리 등 선택과업 비용은 설계 수량과 비교하여 실제 투입수량의 변동이 있을 경우 실제 수량에 맞게 우리 회사와 협의하여 정산 설계변경 한다.

5. 기타 사항

가. 본 용역은 과업지시서에 의하여 시행하되 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 과업수행상 필요하다고 인정되는 추가과업에 대하여는 우리 회사와 협의하여 수행하여야 한다.

나. 계약상대자는 도로안전통제원 교육을 이수하고 관련 자격증을 취득한 자(수급업체 또는 협력업체 직원)를 배치하여 교통안전관리 업무를 전담하도록 하여야 한다.

다. 현장 근로자 안전복장 착용기준

1) 주행차량 운전자가 시각적으로 식별할 수 있는 KS기준 3등급에 부합하는 고가시성 의복을 착용하여야 한다.

2) 종 류 :  <상의> 조끼, 긴팔 티셔츠, 점퍼 / <하의> 바지

- 하의 착용시 상의(조끼)만 착용할 때보다 가시면적 1.5배 증가하기 때문에 하의는 필수 착용하여야 하며 상의는 기상상황을 고려하여 한가지(조끼 또는 점퍼)를 선택하여 착용한다.

3) 대 상 : 점검자, 일반 작업자, 신호수(로봇신호수 포함), 도로안전통제원

4) 안전복장 디자인 : 담당 임무ㆍ업무별로 색깔을 구분하여 현장 관리 및 근로자 상호간 식별이 용이하도록 한다.

구 분	점검자/일반작업자	신호수	도로안전통제원	비 고
조 끼				상의 2 中 택1
점 퍼
바 지				필수착용

Ⅱ. 과업 지시서

제1장 과업 수행 일반지침

1.1 계약상대자의 의무와 책임

가. 본 과업의 계약상대자(이하 “과업수행자”라 한다)는 과업지시서, 관련 법규정 및 지침, 계약조건, 우리 회사의 방침에 따라 제반사항을 성실히 이행하여야 하며, 과업 성과품의 품질과 정확도에 대한 모든 책임을 진다. 또한 본 과업을 수행함에 있어 관계법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다.

나. 특히 시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침 제64조제6항 및 제82조에 의거 관련사항이 발생하지 않도록 과업을 수행하여야 하며, 동 사항 발생 시 향후 우리 회사에서 시행하는 유사 용역의 입찰 참여를 엄격하게 제한할 수 있다.

다. 과업수행에 사용한 자료, 수치는 정확한 근거를 명시하여야 하며, 근거를 명시하지 못한 경우 감독원은 과업수행자에게 재수행을 지시 할 수 있다.

라. 본 과업의 적정수행 여부 확인을 위해 현장 점검 또는 성과품 평가, 성과 발표회 등을 실시할 수 있으며, 지적사항 및 내용상 미비, 과오 등의 결격 사항에 대해 과업수행자의 책임하에 보완 조치하여야 한다.

마. 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 과업 수행 상 필요하다고 인정되는 추가과업에 대해 과업수행자는 우리 회사와 상호 협의하여 과업을 수행하여야 한다.

바. 과업수행자는 차수별 과업 완료 후 그 결과를 30일 이내에 국토교통부 시설물정보관리종합시스템(FMS)에 입력하여야 한다.

사. 본 과업 수행 완료 후에도 성과품에 대한 보완 지시가 있을 경우 과업수행자의 책임과 부담으로 추가 보완하여야 한다.

아. 기존 구조물에 손상을 가한 부위는 측정이 완료된 이후 반드시 원상 복구하여야 한다.

1.2 주요업무의 사전승인

과업수행자는 다음사항에 대해서는 사전에 우리 회사의 승인을 받아 과업을 수행하여야 한다.

가. 사업수행계획서 및 착수신고서의 내용 변경

나. 기본계획을 포함한 주요내용 및 방침의 설정 또는 변경

다. 기타 감독원의 지시나 과업수행자의 판단에 따라 승인 받아야 할 사항

1.3 과업에 참여하는 기술인의 자격

가. 본 과업의 수행을 위한 “책임기술인”의 자격은 시설물안전법 시행령 제9조제1항에 의한 기술자격자로 하며, 과업에 투입되는 “참여기술인”은 시설물안전법 시행령 제9조제2항에 의한 기술자격자로 한다.

나. 우리 회사는 투입된 기술인이 과업수행에 부적합하다고 판단될 경우 기술인 교체를 요구할 수 있으며, 과업수행자는 즉시 이에 따라야 한다.

다. 과업에 참여하는 기술인은 과업수행 기간 중 과업수행자가 임의로 변경할 수 없다. 다만, 변경 사유가 정당하다고 인정될 수 있는 경우에는 즉시 보고하여 우리 회사의 승인을 받아 변경 전 기술인의 자격요건 이상을 갖춘 자로 교체 할 수 있다.

1.4 과업수행 및 공정보고

가. 착수계 제출

1) 과업수행자는 본 용역 계약 체결 후 5일 이내에 다음 각 호의 내용이 포함된 착수계 1부를 우리 회사에 제출하여야 한다.

① 착수계

② 사업책임기술인 선임계

③ 안전보건관리계획서

④ 예정공정표

⑤ 인원 및 장비 투입계획서

⑥ 보안대책 및 보안각서

2) 과업수행자는 당해 시설물의 설계도서 등 유지관리자료와 과업지시서 등이 법령 및 지침 등에 부합되는지의 여부를 검토한 결과(이하 ‘사전검토 보고서’라 한다)하여 해당 차수별 용역 착수일로부터 10일 이내에 우리 회사에게 서면으로 보고하여야 한다. 다만, 용역업무의 특수성 등으로 인하여 별도의 기간을 정할 경우에는 그 기간으로 한다.

3) 사전검토 보고 완료 후 착수일로부터 14일 이내에 다음 사항이 포함된 과업수행계획서를 우리 회사에 서면으로 보고한 후 용역업무를 진행하여야 한다.

① 과업의 목적 및 개요(대상시설물 현황, 과업범위 및 기간)

② 과업수행방법(장비사용 및 조사ㆍ시험계획)

③ 과업수행 일정

④ 과업수행 조직체계 및 인원투입 계획

⑤ 안전관리계획 및 보안대책

⑥ 점검장비(굴절차, 고소차 등) 투입 및 교통안전관리 세부계획

⑦ 사용할 조사기기 및 장비투입계획(제원 및 검교정 성적서 포함)

⑧ 사업책임 및 분야별 책임기술인, 참여기술인의 사용인감 또는 서명

⑨ 사전검토보고서 및 관련 방침사항 등

4) 과업수행계획서 제출 시 전체 기술인의 외업 일수의 합이 설계 대비 100% 이상, PQ 대상 기술자는 외업 일수의 합이 설계 대비 70% 이상이 되도록 세부 인원투입계획을 수립하여야 한다.

5) 설계도서 등의 사전검토 보고서와 과업수행계획서에 관한 일체의 서류는 점검 실시 결과 보고서에 수록하여야 한다.

나. 공정 보고

과업수행자는 과업수행기간 중 일일 업무일지 및 월간 업무보고서를 작성하여 우리 회사에서 지정한 감독원에게 제출하여야 한다.

1) 일일 업무일지 : 매일 17시까지

2) 월간 업무보고서 : 매월 말일 기준으로 작성하여 익월 5일까지

다. 준공계 제출

과업수행자는 각 차수별 용역 준공계를 준공일로부터 7일전까지 우리 회사에 제출하여야 한다.

라. 보고 및 협의

사업책임기술인 및 분야별 책임기술인은 감독원이 필요에 의해서 과업 회의를 개최할 경우 참석하여 과업수행 중 조사된 구조물 결함사항에 대한 원인 및 대책에 대한 보고 및 협의를 하여야 한다. 또한 당초 예정공정계획 대비 95% 이하일 때는 만회대책을 강구하여야 한다.

1.5 보안 및 비밀유지

가. 보안관계 법규의 준수

1) 과업수행자는 과업 수행 시 얻은 정보 또는 성과물 및 관련자료를 계약 이행의 전후를 막론하고 우리 회사의 사전 승인 없이 외부에 누설 및 유출할 수 없다.

2) 본 과업의 준공 시 모든 성과물과 원고는 첨부하여 제출되어야 한다.

나. 보안관리의 책임

1) 과업수행자는 관계법규에 의해 보안관리에 최선을 다하여야 하며 과업수행자의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대해 책임을 져야 한다.

2) 과업수행자는 용역 수행 중 보안대책을 수립하여야 하며, 보안사항 불이행, 부주의, 과실 등으로 인한 모든 책임을 져야 한다.

3) 과업수행자와 참여기술인은 용역 착수계 제출 시 보안각서를 제출한다.

4) 용역 완료 후 작업에 이용한 도면 및 보고서 등은 폐기 처분하여야 한다.

1.6 안전관리

가. 산업재해 예방 조치능력 평가

계약상대자는 계약 체결 이후 중대재해처벌법에서 규정하고 있는 안전 및 보건 이행 능력과 산업재해 예방을 위하여 본 용역 착수 전 우리 회사가 마련한 중대재해예방을 위한 도급사업 안전․보건관리 지침(2025.5)에 따른 산업재해 예방 조치능력 평가 서류를 우리 회사에 제출하여 평가를 받고 평가기준 만족 시 착수, 기준 미달 시 보완하여 재평가 후 착수하여야 한다.

나. 안전보건관리계획 수립

계약상대자는 참여기술인의 안전은 물론 공공의 안전을 위하여 점검장비 및 기기 등을 안전하게 운용하고 작업을 안전하게 수행하도록 산업안전보건법 등 관계법령에서 정한 기준을 준수하여 안전보건관리계획을 수립하고 이행하여야 하며, 안전사고 발생 시 모든 책임은 과업수행자에게 있다.

다. 위험기계․장비 안전관리

고소작업대(굴절차 등) 등 위험장비를 사용하고자 할 경우 세부 공정별 유해․위험요인에 대한 사전 안전조치 확보를 위해 우리 회사 담당부서(재난안전팀)와 합동으로 사전안전성 검토를 시행하여야 하고, 해당 장비를 사용하는 작업 시행 이전에 위험기계․장비 작업계획서를 제출하여야 한다.

라. 안전점검 등의 종사자의 안전

1) 안전점검 등을 실시하는 사람은 안전모, 작업복, 작업화와 필요한 경우 청각, 시각, 안면보호장비 등을 포함한 개인용 보호장구를 항시 착용하여야 하며 진단측정장비 및 기기를 항상 최적의 상태로 정비하여야 한다.

2) 밀폐된 공간에서의 작업이 필요할 경우에는 유해물질, 가스 및 산소결핍 등에 대한 조사와 대책을 사전에 마련하여야 한다.

마. 과업수행자는 시설물의 현장조사 시 다음 사항을 준수하여야 한다.

1) 인원 및 장비 운영에 있어 적절한 관리와 통제를 이행하여 교통사고 등을 예방하여야 한다.

2) 교량 출입 시 사전에 담당부서와 협의하여야 하며, 특히 점검계단 이용 시에는 관련 안전수칙을 철저히 준수하여야 한다.

3) 과업수행 중 차량운행에 따른 교통안전수칙을 준수하고, 안전확보에 최우선하여야 한다.

4) 일일 작업 전 안전교육을 반드시 이행하여야 한다.

5) 과업수행자는 과업수행 전 안전표지, 통행제한 시설 등의 각종 안전시설을 설치하고 일반인의 통행에 지장이 없도록 적절한 대책을 강구하여야 한다.

6) 교통안전시설물 설치 기준은 우리 회사 고속도로공사장 교통관리기준 및 관할 고속도로순찰대(제1지구대)의 협의, 지시에 따라 설치하여야 하며, 모든 작업자 보호차량(2.5톤 이상)은 트럭장착 충격흡수시설을 차량 후미에 장착하여야 한다.

바. 안전관리 일반사항

1) 참여기술인은 안전보건관리계획서에서 정한 사항을 반드시 준수하여야 하며, 사업책임기술인은 해당 기술인의 적정 이행여부 등 안전관리 업무 일체에 대해 관리 감독하여야 한다.

2) 매 작업(점검) 투입 전 반드시 사전 안전교육을 실시하고 모든 참여 기술인은 안전보호구 착용 후 현장에 출입하여야 한다.

3) 우리 회사 감독원 또는 지정된 안전관리 담당자의 현장 순회점검 시 불안전한 요소 발견 즉시 작업(점검) 중지를 통보할 수 있으며, 이러한 경우 과업수행자는 즉시 작업을 중단하고 철수하여야 한다.

4) 계약상대자는 근로자 안전보건교육, 위험성 평가, 안전보건협의체 구성 및 운영 등 산업안전보건법에서 정하고 있는 사업장 내 안전보건관리에 대한 필요한 조치를 담은 안전보건관리계획을 용역 착수계에 포함하여 제출하여야 하며, 용역 수행 시 이를 성실히 이행하여야 한다.

1.7 하도급 관리

가. 과업수행자는 본 용역을 도급받은 후 제3자에게 하도급할 수 없으며, 하도급 사례 발견시 '과업수행자‘는 관련 법규정에 의한 처벌 및 계약취소 등 우리 회사가 결정하는 사항을 따라야 한다.

나. 다만, 시설물안전법 제27조에 따라 해당 전문기술이 필요한 분야에 대해 감독원과 사전 협의한 후 총 도급금액의 100분의 50이하의 범위 내에서 분야별 한 차례만 허용하며, 사전에 감독원과 협의한 후 하도급 계약․변경․해지시 10일 이내에 우리 회사에 서면통보 하여야 한다.

다. 외부 전문기관에 콘크리트 재료시험 등을 의뢰하는 경우에도 우리 회사에 하도급 계약을 서면통보하여야 하며, 공인된 기관에 의뢰 후 원본대조필이 있는 시험성적서를 보고서에 첨부하여야 한다.

1.8 용어의 해석

과업지시서상의 용어해석에 차이가 있을 경우에는 우리 회사와 과업수행자가 상호 협의하여 결정하도록 한다.

1.9 업체 사후평가

가. 과업 수행 종료 시 업무 수행능력 및 충실도, 협력도, 공정관리 및 보안관리 적정성, 산업재해 발생여부 등에 대해 우리 회사에서 제정하여 운영하고 있는 평가기준에 의거 사후평가를 실시한다.

나. 평가결과 100점 만점 중 80점 미만으로 평가된 경우 우리 회사 관련기준에 따라 차기 용역에 대한 입찰참가가 제한된다.

제2장 과업 수행 세부사항

2.1 일반사항

가. 과업기간 중 대상구조물에서 신속히 조치되어야 할 결함이나 손상이 발견될 경우에는 즉시 감독원에게 보고하고 조치방안을 제시하여야 한다.

나. 구조물 내구성 조사를 위해 사용되는 각종 장비는 노후 및 오차가 없는 것으로 선정하고 사전에 검․교정 완료 및 안전성을 확인한다.

다. 세부 부재별 현장조사 내용은 영상 또는 화상으로 상세히 작성한다.

라. 현장 주요여건

1) 교량 점검로 미설치에 따른 교량 점검방법 시 굴절 점검차 등 사용

2) 출퇴근 시간대 교통량 집중에 따른 점검 시간 제한(10:00~16:00 가능)

3) 공용중 고속도로에 따른 교통 통제 시 교통안전시설 설치 필요

2.2 각 단계별 과업 세부사항

가. 정기안전점검

1) 자료 수집 및 분석

① 정기안전점검에 필요한 준공도서, 시설물관리대장 등 관련자료를 수집․분석하여야 하며, 준공이후 시방서 및 제반 설계 기준의 변경사항을 검토하여 현행 기준과의 차이점을 파악한다.

② 해당 시설물에 대한 기존 안전점검․정밀안전진단 결과 및 보수․보강이력 등의 자료를 수집․분석하고 내진설계 여부를 확인하여 시설물에 도출된 문제점 등을 면밀히 조사, 분석하여야 한다.

2) 현장조사

① 착수 후 즉시 과업대상시설물에 대한 예비답사 및 현장조사를 위한 세부계획을 수립한다.

② 조사전 부식, 노후화 또는 기타 식별이 어려운 결함을 발견하기 위하여 육안으로 근접조사하기 전에 조사부위를 깨끗이 청소하여야 하며, 조사된 손상이나 결함은 해당 부위에 백묵 등으로 수량, 조사일시 등을 표시하여야 한다.

③ 콘크리트 구조물의 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출 등과 강재 구조물의 균열, 도장상태, 부식 및 접합(연결부) 상태 등의 결함 및 손상을 조사한다.

④ 전체 구조물 외관에 대하여 육안과 간단한 측정기기로 조사를 실시하고, 그 결과를 외관조사망도에 작성하여 제출한다.

⑤ 안전점검 실시 결과 시설물의 구조안전에 중대한 영향을 미치는 것으로 인정되는 중대한 결함이 있는 경우, 즉시 감독원에게 통보하여야 한다.

3) 상태평가 및 안전등급

① 시설물에 대한 외관조사를 실시하고 그 결과를 분석하여야 한다.

② 시설물 전체의 상태평가 결과에 대한 책임기술인의 소견(안전등급 지정)을 제시하여야 하며, 제1종 및 제2종 시설물에 한해 제3종시설물 안전등급 평가 매뉴얼을 준용하여 전차 대비 차기 정밀안전점검 시 예상되는 안전등급을 검토하여 제출한다.(FMS 미등재, 성과품 납품 시 반영)

나. 정밀안전점검

1) 자료 수집 및 분석

① 정밀안전점검에 필요한 준공도면, 구조계산서, 시방서, 시설물관리대장 등 관련자료를 수집․분석하여야 하며, 준공 이후 시방서 및 제반 설계 기준의 변경사항을 검토하여 현행 기준과의 차이점을 파악한다.

② 해당 시설물에 대한 안전점검․정밀안전진단 결과 및 보수․보강이력 등의 자료를 수집․분석하고 내진설계 여부를 확인하여 시설물에 도출된 문제점 등을 면밀히 조사, 분석하여야 한다.

2) 현장조사 및 시험

① 착수 후 즉시 과업대상시설물에 대한 예비답사 및 현장조사를 위한 세부계획을 수립한다.

② 조사전 부식, 노후화 또는 기타 식별이 어려운 결함을 발견하기 위하여 육안으로 근접조사하기 전에 조사부위를 깨끗이 청소하여야 하며, 조사된 손상이나 결함은 해당 부위에 백묵 등으로 수량, 조사일시 등을 표시하여야 한다.

③ 콘크리트 구조물의 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출 등과 강재 구조물의 균열, 도장상태, 부식 및 접합(연결부) 상태 등의 결함 및 손상을 조사한다.

④ 전체 구조물 외관에 대하여 정밀 육안조사를 실시하고, 그 결과를 외관조사망도에 작성하여 제출한다.

⑤ 교량받침, 신축이음장치 등은 손상유무에 관계없이 모든 부위를 조사하여 자료를 제출하여야 하며 신축․변형․변위가 발생할 수 있는 부재는 유간 또는 기울기 등을 측정․기록하여야 한다.

⑥ 실내시험은 KS규격을 기준으로 하며 KS규격에 없는 시험은 ASTM이나 AASHTO 등의 외국기준에 의해 실시할 수 있으며, 시험결과는 이전에 실시한 시험결과와 비교․분석 평가한다.

⑦ 과업중 실시한 모든 시험결과는 시험보고서 형태로 보고서에 수록한다.

⑧ 재료시험 항목 및 기준수량(기본과업) 등은「시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(이하 “세부지침”이라한다)」에서 정한 바에 따르되, 콘크리트 비파괴강도(반발경도시험) 및 콘크리트 탄산화 깊이 측정 등 간단한 현장 재료시험은 기본과업으로 시행한다.

3) 상태평가

① 이전의 안전점검 결과를 참고하여 외관조사 결과와 시험․측정 결과를 분석하고 상태평가 결과를 작성하여야 하며, 손상의 진전여부를 확인 한다.

② 구조물의 결함 부위는 상세조사 후 결함 원인을 분석하여야 하며, 부재별 상태평가 및 시설물 전체의 상태평가 결과에 대한 소견을 제시한다.

4) 종합평가 및 안전등급 지정

① 평가는 객관성과 일관성을 확보하여 실시하며, 관련법령에서 정한 절차와 방법에 따라 안전등급을 지정한다.

② 본 과업을 통해 안전등급이 변경되는 경우에는 타당한 근거가 제시되어야 한다.

5) 보수․보강방안 및 유지관리방안 제시

① 보수시기, 보수 우선순위 및 보수대책은 고속도로상 작업여건을 감안, 이용객의 불편을 최소화할 수 있는 방안으로 각 구조물별로 작성하여야 한다.

② 보수․보강대책은 시설물의 전면 보수시까지 구조물의 기능을 유지하기 위하여 필요한 사항(보수대상, 공법, 소요예산)을 선정․제시하여야 한다.

③ 본 과업수행 중 파악한 유지관리상의 문제점에 대한 적절한 보완 대책을 작성, 유지관리 개선사항으로 제시한다.

④ 구조물의 노후도 및 안전성을 고려하여 구조물별 특성에 맞는 효율적인 유지관리방안을 제시하여야 한다.

⑤ 향후 유지관리 시 활용을 위한 점검순서, 점검 중점유지관리 사항 등 맞춤형 점검 메뉴얼을 작성하여 제시하여야 한다.

2.3 보고서 작성

본 과업의 실시 결과 보고서는 우리 회사의 유지관리업무에 효율적이며 체계적으로 활용할 수 있도록 과업내용을 중심으로 작성ㆍ제출하여야 하며, 세부적인 작성방법은「세부지침」을 따른다. 보고서는 공구별로 분류하여 작성한다.

가. 정기안전점검보고서 작성방법

1) 서 두

보고서의 표지 다음에 정기안전점검의 개요를 쉽게 알 수 있도록 다음의 서류를 붙인다.

① 제출문(정기안전점검을 실시한 기관의 장)

② 시설물별 정기안전점검 결과표

③ 참여 기술진 명단(서명 날인 포함)

④ 시설물의 위치도

⑤ 시설물의 전경사진, 부위별 사진

⑥ 정기안전점검 실시 결과 요약문

⑦ 보고서 목차

2) 정기안전점검의 개요

정기안전점검의 범위와 과업내용 등 정기안전점검 계획 및 실시와 관련된 주요 사항을 기술한다.

① 정기점검의 목적

② 시설물의 개요 및 이력사항

③ 점검의 범위 및 과업내용

④ 사용장비 및 기기 현황

⑤ 점검 수행일정

3) 자료 수집 및 분석

정기안전점검과 관련된 아래 자료를 검토ㆍ분석하고 그 내용을 기술한다.

① 기존 안전점검 및 안전진단 등 실시 결과

② 보수ㆍ보강 이력

③ 기타 관련 자료

4) 현장조사

과업내용에 의거 실시한 현장조사 결과 분석 내용을 기술하고 필요한 경우 사진 또는 동영상 등을 첨부한다.

① 전체시설물 외관조사 결과 분석

② 주요한 결함(손상)의 발생원인 분석

③ 손상 물량 집계

5) 종합 결론

과업내용에 의거 실시한 현장조사 결과에 따른 보수ㆍ보강방안 및 중점 유지관리사항을 작성하여야 한다.

① 정기안전점검 실시 결과

② 보수ㆍ보강 방안

③ 중점 유지관리 사항

④ 기타 필요한 사항 등

6) 부록

① 과업지시서

② 외관조사망도

③ 현황조사 및 외관조사 사진첩

④ 기타 참고자료

나. 정밀안전점검보고서 작성방법

1) 서 두

보고서의 표지 다음에 정밀안전점검의 개요를 쉽게 알 수 있도록 다음의 서류를 붙인다.

① 제출문(정밀안전점검을 실시한 기관의 장)

② 시설물별 정밀안전점검 결과표(안전등급)

③ 참여 기술진 명단(서명 날인 포함)

④ 시설물의 위치도

⑤ 시설물의 전경사진, 부위별 사진

⑥ 정밀안전점검 실시 결과 요약문

⑦ 보고서 목차

2) 정밀안전점검의 개요

정밀안전점검의 범위와 과업내용 등 정밀안전점검 계획 및 실시와 관련된 주요 사항을 기술한다.

① 정밀점검의 목적

② 시설물의 개요 및 이력사항

③ 점검의 범위 및 과업내용

④ 사용장비 및 기기 현황

⑤ 점검 수행일정

3) 자료 수집 및 분석

정밀안전점검과 관련된 아래 자료를 검토ㆍ분석하고 그 내용을 기술한다.

① 설계도면, 구조계산서

② 기존 정밀안전점검 실시 결과

③ 보수ㆍ보강 이력(시설물의 내진설계 여부 확인, 기타 관련 자료)

4) 현장조사 및 시험

과업내용에 의거 실시한 현장조사, 시험 및 측정 등의 결과 분석 내용을 기술하고 필요한 경우 사진 또는 동영상 등을 첨부한다.

① 기본시설물 또는 주요 부재별 외관조사 결과 분석

② 주요한 결함(손상)의 발생원인 분석

③ 재료시험 및 측정 결과분석

5) 시설물의 상태평가 및 종합평가

과업내용에 의거 실시한 현장조사 및 시험의 분석 결과에 따라서 시설물의 상태평가 결과를 작성하고, 상태평가 및 안전성 평가 등을 종합적으로 평가하여 시설물의 안전 등급을 지정하여야 한다.

① 대상 부재별 상태평가 및 시설물 전체의 상태평가 결과 결정

② 콘크리트 또는 강재의 내구성 평가

③ 종합평가 및 안전등급 결정

④ 전차 점검결과와 비교 분석

⑤ 종합결론

6) 보수공법 및 유지관리방안

과업 수행 결과에 따라 손상 및 결함이 있는 부위 또는 부재 등에 대하여 적용할 보수ㆍ보강 방법과 우선순위 등의 보수방안 및 유지관리방안을 제시한다.

① 보수ㆍ보강방법에 대한 개요, 시공방법, 시공시 주의사항 등 보수방안

② 당해 시설물의 유지관리를 위한 요령 및 대책

7) 부록

① 과업지시서

② 외관조사망도

③ 측정, 시험, 계측 성과표

④ 상태평가 결과 자료

⑤ 시설물관리대장 사본

⑥ 현황조사 및 외관조사 사진첩

⑦ 사용장비 및 기기 사진

⑧ 사전조사 자료 일체(사점검토 보고서, 과업수행계획서 등)

⑨ 기타 참고자료

다. e-보고서 작성

1) e-보고서는 정밀안전점검 및 정밀안전진단, 성능평가 실시 결과 보고서를 보관 등 유지관리 업무에 효율적이며 체계적으로 활용할 수 있도록 전자매체(PDF파일)로 작성하여야 한다.

2) e-보고서에는 조사내용, 결과분석 등을 열람할 수 있도록 작성하여야 하며, 첨부되는 사진(칼라) 또는 동영상(칼라) 등은 결함을 구체적으로 확인 할 수 있도록 하여 e-보고서와 서식에서 상호 참조할 수 있도록 하여야 한다.

3) e-보고서에는 시설물 안전성평가를 위한 입ㆍ출력 자료 전체를 포함하여야 하며, 기간이 경과한 후에도 결함에 대한 해석이 가능하도록 상세하고 명확하여야 한다.

4) e-보고서의 구성은 다음의 내용에 맞게 구성되어야 하며, 폴더명 및 파일명은 식별 가능한 체계를 갖추어 작성하여야 한다.

① e-보고서를 시설물통합정보관리시스템(FMS)에 제출할 경우 폴더의 구성은 ⓐ계약서 및 대가내역서 폴더, ⓑ과업지시서 폴더, ⓒ보고서 폴더, ⓓ보고서 부록 폴더로 구성되며, 각각의 폴더에 관련 파일을 수록하여야 한다.

② 각 폴더에 저장하는 파일의 형식은 계약서 및 대가내역서, 과업지시서, 보고서 폴더에는 PDF 형식의 파일만을 저장하여야 하고, 보고서 부록 폴더의 파일 형식은 PDF 파일 형식을 원칙으로 하나, 일반적으로 사용하는 원본 파일 형식(한글, CAD, 동영상, JPG 등)은 수록 가능하다.

③「계약서 및 대가내역서」폴더에는 다수의 시설물을 1건으로 계약한 경우 각 시설물 별로 계약금액을 알 수 있는 산출 내역서, 2개 이상의 업체가 공동수행한 경우 각 업체의 계약금액을 알 수 있는 산출 내역서 등 PDF 형식의 파일을 반드시 수록하여야 한다.

④「과업지시서」폴더에는 과업지시서, 과업수행계획서, 과업지시서나 용역설계서 내용이 법령, 지침 및 세부지침에 부합되는지 여부를 검토한 사전검토 보고서 등 PDF 형식의 파일을 수록한다.

⑤「보고서」폴더에는 안전점검등의 보고서의 내용을 PDF 형식의 파일로 수록한다.

⑥「보고서 부록」폴더에는 시설물관리대장, 사전조사 자료, 외관조사망도에 의한 손상평가도, 시험 및 계측성과 자료, 사진첩, 시설물 평가(상태평가, 안전성 평가, 종합평가)자료, 수치해석 입출력 자료, 전문가 자문내용, 기타 참고자료 등 관련 파일을 수록한다.

2.4 과업수행 적용기준

가. 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법

나. 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침

다. 국토교통부 발행 관련 건설기준코드 및 기타 관련법규 등

2.5 특기 사항

가. 설계도서 등의 사전검토 보고서와 과업수행계획서에 관한 일체의 서류는 결과 보고서에 수록한다.

나. 본 과업 수행을 위해 고속도로를 통행해야 하는 차량에 대한 통행료는 과업수행자의 부담으로 시행하여야 한다.

2.6 성과품의 제출

가. 성과품의 작성

1) 성과품 작성은 한글사용을 원칙으로 하되, 필요한 경우 영어를 사용할 수 있으며, 단위는 SI 단위를 사용한다.

2) 감독원이 필요하다 판단하여 요구할 경우 중간 성과품을 작성․제출하여 용역 시행중 검토를 받아야 한다.

3) 최종 납품예정 성과품은 차수별 과업 종료 15일 전까지 제출하여 사전검토를 받아야 하며, 여기서 지적되는 미비사항은 수정하여 성과물을 작성하여야 한다.

4) 과업수행과정에서 작성되는 각종 도서의 미비, 과오, 기술상 오류 등의 결함에 대한 책임은 과업수행자에게 있다.

5) 모든 성과품 제출 시 각종 기록부분 및 사진은 원본을 포함하여 제출한다.

6) 외관조사 결과는 판독성이 매우 용이한 상태로 제출하여야 한다.

7) 외관조사망도는 각 시설물별로 작성하여 제출하여야 하며, 기존 자료에 점검결과를 업데이트하여 이력관리할 수 있도록 제공하여야 한다.

8) 보고서는 사진첩, 외관조사망도, 각종 시험자료 등 보고서 작성에 관련된 모든 자료를 수록하여야 하며 구조물별로 작성한다. 요약보고서는 공구별 작성을 원칙으로 하며 보고서 제출시 함께 제출한다.

나. 성과품 납품 목록

종 류	규격	제출부수	비고
․ 최종보고서(부록 포함)	A4	각 2부	공구별
․ 보수ㆍ보강 요약보고서	A4	각 2부	공구별
․ 현장조사(손상현황) 사진첩	A4	각 2부	공구별
․ 외관조사망도	A3	각 2부	공구별
․ 보고서 완본 수록 전자파일	외장하드	2매

시설물 현황 (제1종~제3종)

붙 임1

1) 교량

NO	시설물명	연장 (m)	형식	종별	‘26년 상		‘26년 하		‘27년 상		‘27년 하		비고
					정기점검	정밀점검	정기점검	정밀점검	정기점검	정밀점검	정기점검	정밀점검
1	영덕1교	30	RPF	3종	○		○		○		○		1공구
2	영덕2교	55	STB	2종		○	○		○		○
3	신대교	40	RPF	3종	○		○		○		○
4	여수내교	35	RPF	3종	○		○		○		○
5	동역교	35	RPF	3종	○		○		○		○
6	상현교	180	STB	1종	○			○	○		○
7	상현1교(서울)	63.5	STB	2종		○	○		○		○		2공구
8	상현1교(용인)	63.5	STB	2종		○	○		○		○
9	광교IC교	63.5	STB	2종	○		○			○	○
10	길마재교(서울)	175.0	PSCI	2종	○		○			○	○
11	길마재교(용인)	210.0	PSCI	2종		○	○		○		○
12	성복교(서울)	140.0	PSCI	2종	○		○			○	○
13	성복교(용인)	140.0	PSCI	2종		○	○		○		○
14	서수지IC교(서울)	140.0	PSCI	2종		○	○		○		○
15	서수지IC교(용인)	140.0	PSCI	2종		○	○		○		○

NO	시설물명	연장 (m)	형식	종별	‘26년 상		‘26년 하		‘27년 상		‘27년 하		비고
					정기점검	정밀점검	정기점검	정밀점검	정기점검	정밀점검	정기점검	정밀점검
16	수지교(서울)	630.0	STB	1종	○			○	○		○		3공구
17	수지교(용인)	630.0	STB	1종	○			○	○		○
18	동천육교	94	PRC	3종	○		○		○		○
19	고기교(서울)	70	PSCI	3종	○		○		○		○
20	고기교(용인)	70	PSCI	3종	○		○		○		○
21	대장1교(서울)	270.0	STB	2종		○	○		○		○
22	대장1교(용인)	270.0	STB	2종	○		○			○	○
23	대장2교(서울)	55.0	STB	2종		○	○		○		○
24	대장2교(용인)	55.0	STB	2종		○	○		○		○
25	서분당(고기)IC교	130.0	STB	1종	○			○	○		○
26	하산운교	680	STB	1종	○			○	○		○		4공구
27	서판교IC1교	235	STB	1종	○			○	○		○
28	서판교IC2교	220	STB	1종	○			○	○		○
29	금토1교(서울)	30	PSCI	3종	○		○		○		○		5공구
30	금토1교(용인)	30	PSCI	3종	○		○		○		○
31	금토2교(서울)	280	PSCI	2종		○	○		○		○
32	금토2교(용인)	315	PSCI	2종		○	○		○		○

NO	시설물명	연장 (m)	형식	종별	‘26년 상		‘26년 하		‘27년 상		‘27년 하		비고
					정기점검	정밀점검	정기점검	정밀점검	정기점검	정밀점검	정기점검	정밀점검
33	금토3교(서울)	320	STB	1종	○			○	○		○		5공구
34	금토3교(용인)	320	STB	1종	○			○	○		○
35	고등교(서울)	370.0	STB	1종	○			○	○		○		6공구
36	고등교(용인)	430.0	STB	1종	○			○	○		○
37	고등IC1교	170.0	STB	1종	○			○	○		○
38	고등IC2교	45	STB	3종	○		○		○		○
39	세곡교(서울)	97.4	PCT	1종	○			○	○		○
40	세곡교(용인)	97.4	PCT	1종	○			○	○		○
41	헌릉IC1교	105.9	PCT	1종	○			○	○		○
42	헌릉IC2교	40	PF	3종	○		○		○		○
43	헌릉IC3교	49.4	PF	3종	○		○		○		○

2) 터널 및 지하차도

NO	시설물명	연장 (m)	형식	종별	‘26년 상		‘26년 하		‘27년 상		‘27년 하		비고
					정기점검	정밀점검	정기점검	정밀점검	정기점검	정밀점검	정기점검	정밀점검
1	금광지하차도	465	RC BOX	2종	○		○		○		○		1공구
2	신대지하차도	495	RC BOX	2종	○		○		○		○
3	여수내지하차도	255	RC BOX	2종	○		○		○		○
4	동역지하차도	245	RC BOX	2종	○		○		○		○
5	길마재터널(서울)	450	NATM	1종	○		○		○			○	2공구
6	길마재터널(용인)	424	NATM	1종	○		○		○			○
7	성복터널(서울)	375	NATM	1종	○		○		○			○
8	성복터널(용인)	410	NATM	1종	○		○		○			○
9	동천터널(서울)	435	NATM	1종	○		○		○			○	3공구
10	동천터널(용인)	475	NATM	1종	○		○		○			○
11	고기터널(서울)	895	NATM	1종	○		○		○			○
12	고기터널(용인)	890	NATM	1종	○		○		○			○
13	하산운터널(상행)	1,657	NATM	1종	○			○	○		○		4공구
14	하산운터널(하행)	1,677	NATM	1종	○			○	○		○
15	운중터널(서울)	775	NATM	1종	○		○		○			○	5공구
16	운중터널(용인)	775	NATM	1종	○		○		○			○

NO	시설물명	연장 (m)	형식	종별	‘26년 상		‘26년 하		‘27년 상		‘27년 하		비고
					정기점검	정밀점검	정기점검	정밀점검	정기점검	정밀점검	정기점검	정밀점검
17	고산터널(서울)	620	NATM	1종	○		○		○			○	5공구
18	고산터널(용인)	554	NATM	1종	○		○		○			○
19	고등터널(서울)	538	NATM	2종	○		○		○		○		6공구
20	고등터널(용인)	489	NATM	2종	○		○		○		○
21	심곡터널(서울)	1,205	NATM	1종	○		○		○			○
22	심곡터널(용인)	1,215	NATM	1종	○		○		○			○
23	세곡터널(서울)	1,135	NATM	1종	○		○		○			○
24	세곡터널(용인)	1,130	NATM	1종	○		○		○			○

3) 옹벽

NO	시설물명	연장 (m)	높이 (m)	종별	‘26년 상		‘26년 하		‘27년 상		‘27년 하		비고
					정기점검	정밀점검	정기점검	정밀점검	정기점검	정밀점검	정기점검	정밀점검
1	보강토옹벽1	250.2	0.7～9.7	2종	○		○		○		○		1공구
2	보강토옹벽2	240.0	0.7～11.9	2종	○		○		○		○
3	RC 옹벽1	142.9	5.0～7.0	2종	○		○		○		○		2공구
4	RC 옹벽2	248.3	5.0～7.5	2종	○		○		○		○
5	보강토옹벽3	332.0	8.3	2종	○		○		○		○
6	보강토옹벽4	208.0	1.0～13.0	2종	○		○		○		○
7	보강토옹벽5	203.5	1.0～14.3	2종	○		○		○		○
8	보강토옹벽6	145.0	3.0～21.0	2종	○		○		○		○		3공구
9	보강토옹벽7	247.3	9.0～10.0	2종	○		○		○		○
10	보강토옹벽8	130.6	8.0～12.0	2종	○		○		○		○
11	보강토옹벽9	114.0	3.5～8.0	2종	○		○		○		○		4공구
12	보강토옹벽10	139.0	8.1～10.0	2종	○		○		○		○		6공구
13	보강토옹벽11	169.0	6.9～12.5	2종	○		○		○		○

4) 절토사면

NO	시설물명	연장 (m)	높이 (m)	종별	‘26년 상		‘26년 하		‘27년 상		‘27년 하		비고
					정기점검	정밀점검	정기점검	정밀점검	정기점검	정밀점검	정기점검	정밀점검
1	절토사면1	517	36.24	2종		○	○		○		○		2공구
2	절토사면2	443	42.18	2종		○	○		○		○
3	절토사면3	380	32.13	2종		○	○		○		○
4	절토사면4	544	46.47	2종		○	○		○		○
5	절토사면5	704	38.29	2종		○	○		○		○		4공구
6	절토사면6	463	51.86	2종		○	○		○		○
7	절토사면7	283	33.01	2종		○	○		○		○		5공구
8	절토사면8	542	48.14	2종		○	○		○		○		6공구

시설물 현황 (기타)

붙 임2

1) 교량

NO	시설물명	교장 (m)	형식	종별	‘26년 상		‘26년 하		‘27년 상		‘27년 하		비고
					정기점검	정밀점검	정기점검	정밀점검	정기점검	정밀점검	정기점검	정밀점검
1	광교IC1교	16	Rahmen	기타	○		○		○		○		2공구
2	광교IC2교	45	STB	기타	○		○		○		○
3	손곡교	19	Rahmen	기타	○		○		○		○		3공구

2) 절토사면

NO	시설물명	연장 (m)	높이 (m)	종별	‘26년 상		‘26년 하		‘27년 상		‘27년 하		비고
					정기점검	정밀점검	정기점검	정밀점검	정기점검	정밀점검	정기점검	정밀점검
1	기타사면1	220	25.82	기타	○		○		○		○		1공구
2	기타사면2	83	16.15	기타	○		○		○		○
3	기타사면3	136	24.42	기타	○		○		○		○		2공구
4	기타사면4	194	25.08	기타	○		○		○		○
5	기타사면5	69	12.83	기타	○		○		○		○
6	기타사면6	192	20.04	기타	○		○		○		○
7	기타사면7	136	20.20	기타	○		○		○		○
8	기타사면8	60	9.17	기타	○		○		○		○

NO	시설물명	연장 (m)	높이 (m)	종별	‘26년 상		‘26년 하		‘27년 상		‘27년 하		비고
					정기점검	정밀점검	정기점검	정밀점검	정기점검	정밀점검	정기점검	정밀점검
9	기타사면9	183	21	기타	○		○		○		○		2공구
10	기타사면10	104	9.72	기타	○		○		○		○
11	기타사면11	112	17.97	기타	○		○		○		○
12	기타사면12	101	9.09	기타	○		○		○		○
13	기타사면13	130	23.98	기타	○		○		○		○
14	기타사면14	274	17.92	기타	○		○		○		○		3공구
15	기타사면15	112	10.64	기타	○		○		○		○
16	기타사면16	355	14.60	기타	○		○		○		○
17	기타사면17	572	16.88	기타	○		○		○		○
18	기타사면18	172	15.32	기타	○		○		○		○
19	기타사면19	156	19.53	기타	○		○		○		○
20	기타사면20	101	20.30	기타	○		○		○		○
21	기타사면21	64	9.48	기타	○		○		○		○
22	기타사면22	75	20.30	기타	○		○		○		○
23	기타사면23	120	14.65	기타	○		○		○		○		4공구
24	기타사면24	190	21.10	기타	○		○		○		○

NO	시설물명	연장 (m)	높이 (m)	종별	‘26년 상		‘26년 하		‘27년 상		‘27년 하		비고
					정기점검	정밀점검	정기점검	정밀점검	정기점검	정밀점검	정기점검	정밀점검
25	기타사면25	203	22.70	기타	○		○		○		○
26	기타사면26	164	25.70	기타	○		○		○		○
27	기타사면27	328	13.85	기타	○		○		○		○		5공구
28	기타사면28	232	14.56	기타	○		○		○		○
29	기타사면29	240	24.77	기타	○		○		○		○
30	기타사면30	319	15.96	기타	○		○		○		○
31	기타사면31	220	22.54	기타	○		○		○		○
32	기타사면32	106	16.60	기타	○		○		○		○
33	기타사면33	340	16.44	기타	○		○		○		○		6공구
34	기타사면34	109	19.67	기타	○		○		○		○
35	기타사면35	79	18.10	기타	○		○		○		○
36	기타사면36	110	19.13	기타	○		○		○		○
37	기타사면37	137	14.96	기타	○		○		○		○		6공구
38	기타사면38	175	10.49	기타	○		○		○		○
39	기타사면39	127	25.91	기타	○		○		○		○
40	기타사면40	165	19.11	기타	○		○		○		○

NO	시설물명	연장 (m)	높이 (m)	종별	‘26년 상		‘26년 하		‘27년 상		‘27년 하		비고
					정기점검	정밀점검	정기점검	정밀점검	정기점검	정밀점검	정기점검	정밀점검
41	기타사면41	248	14.80	기타	○		○		○		○		6공구
42	기타사면42	203	13.42	기타	○		○		○		○
43	기타사면43	277	12.61	기타	○		○		○		○
44	기타사면44	208	8.75	기타	○		○		○		○

3) 방음터널

NO	시설물명	연장 (m)	종별	‘26년 상		‘26년 하		‘27년 상		‘27년 하		비고
				정기점검	정밀점검	정기점검	정밀점검	정기점검	정밀점검	정기점검	정밀점검
1	흥덕방음터널	610	기타	○		○		○		○		1공구
2	하산운방음터널	1,147	기타	○		○		○		○		4공구

4) 통로암거

NO	위치	규격	연장 (m)	종별	‘26년 상		‘26년 하		‘27년 상		‘27년 하		비고
					정기점검	정밀점검	정기점검	정밀점검	정기점검	정밀점검	정기점검	정밀점검
1	STA. 4+282	1@3.0X3.0	80.0	기타	○		○		○		○		2공구
2	광교IC R-C 1+026.22	1@9.5X5.0	48.97	기타	○		○		○		○
3	서수지 R-B 0+037	1@3.0X3.0	27.20	기타	○		○		○		○
4	서수지 R-C 0+316	1@3.0X3.0	18.80	기타	○		○		○		○
5	STA. 7+460	1@2.5X2.5	150.90	기타	○		○		○		○
6	회차로 0+190	1@6.0X5.5	30.00	기타	○		○		○		○
7	STA. 11+779.16	1@5.0X5.0	47.60	기타	○		○		○		○		4공구
8	STA. 14+176	1@3.5X3.5	64.00	기타	○		○		○		○
9	STA. 17+100	1@2.5X2.5	132.00	기타	○		○		○		○		5공구
10	STA. 18+498	1@6.0X4.5	74.00	기타	○		○		○		○
11	STA. 20+288	1@4.5X4.5	59.747	기타	○		○		○		○		6공구
12	STA. 21+840	1@4.5X4.5	68.10	기타	○		○		○		○
13	헌릉IC R-A 0+852.1	1@10.0X5.0	49.00	기타	○		○		○		○
14	헌릉IC R-E	1@10.0X5.0	10.00	기타	○		○		○		○

5) 수로암거

NO	위치	규격	연장 (m)	종별	‘26년 상		‘26년 하		‘27년 상		‘27년 하		비고
					정기점검	정밀점검	정기점검	정밀점검	정기점검	정밀점검	정기점검	정밀점검
1	부체도로#3 0+060	1@2.0X2.0	9.97	기타	○		○		○		○		1공구
2	STA 2+065	1@1.5X1.5	94.60	기타	○		○		○		○		2공구
3	광교IC R-C 1+252.68	1@1.5X1.5	20.45	기타	○		○		○		○
4	STA 5+060	1@2.0X2.0	115.50	기타	○		○		○		○
5	부체도로#9 0+029	1@2.5X2.5	20.90	기타	○		○		○		○
6	서수지IC R-A 0+043	1@2.5X2.5	131.10	기타	○		○		○		○
7	서수지IC R-D 0+477.6	1@2.5X2.5	92.97	기타	○		○		○		○
8	서수지IC R-E 0+500	1@2.5X2.5	43.30	기타	○		○		○		○
9	서수지IC STA 0+346	1@2.5X2.5	87.00	기타	○		○		○		○
10	서수지IC STA 0+530	1@2.5X2.5	22.00	기타	○		○		○		○
11	서수지IC R-E 0+800	1@2.5X2.5	55.00	기타	○		○		○		○
12	부체도로#3 0+219	1@2.5X2.0	30.20	기타	○		○		○		○		3공구
13	STA 9+347.8	1@3.0X3.0	20.60	기타	○		○		○		○
14	STA 9+365	1@3.0X3.0	19.80	기타	○		○		○		○
15	STA 9+480	1@2.0X2.0	35.70	기타	○		○		○		○

NO	위치	규격	연장 (m)	종별	‘26년 상		‘26년 하		‘27년 상		‘27년 하		비고
					정기점검	정밀점검	정기점검	정밀점검	정기점검	정밀점검	정기점검	정밀점검
16	부체도로#8 0+085	1@2.5X2.0	20.8	기타	○		○		○		○		3공구
17	서분당(고기) 0+266.5	1@2.5X2.5	115.60	기타	○		○		○		○
18	STA 11+747.3	1@2.5X2.5	98.00	기타	○		○		○		○
19	STA 11+840	1@2.0X2.0	5.80	기타	○		○		○		○		4공구
20	STA 11+860	1@2.0X2.0	40.10	기타	○		○		○		○
21	STA 11+900	1@2.0X2.0	97.60	기타	○		○		○		○
22	STA 13+907	1@2.5X2.0	81.40	기타	○		○		○		○
23	STA 18+487	1@3.0X3.0	73.20	기타	○		○		○		○		5공구
24	STA 20+386	1@2.5X2.5	53.89	기타	○		○		○		○		6공구
25	STA 21+724.7	1@2.5X2.0	18.85	기타	○		○		○		○
26	STA 21+730	1@2.5X2.0	28.48	기타	○		○		○		○
27	STA 21+965.7	1@2.0X2.0	21.10	기타	○		○		○		○
28	STA 21+972.5	1@2.0X2.0	29.00	기타	○		○		○		○
29	헌릉IC R-B 0+084	1@2.0X2.0	17.84	기타	○		○		○		○
30	헌릉IC R-C 0+370	1@2.0X2.0	18.10	기타	○		○		○		○

[별지서식1]

[별지서식1]

착   수   계

1. 계 약 번 호 :

2. 용  역  명 :

3. 계 약 금 액 :

4. 계약 년월일 :

5. 착수 년월일 :

6. 준공 년월일 :

7. 준 공 기 한 :

8. 첨 부 서 류 : 공정표(용역수행계획) 1부, 산출내역서 1부

상기 용역건에 대하여 위와 같이 착수계를 제출합니다.

20  년  월  일

	계약상대자
	주 소 :
	상 호 :
	대 표 이 사 :	(인)
경수고속도로주식회사 대표이사 귀하

[별지서식2]

책임기술인 지정 신고서

1. 계 약 번 호 :

2. 용  역  명 :

3. 계 약 금 액 :

4. 주       소 :

5. 성       명 :             (서명 또는 인) (생년월일 :               )

6. 자 격 증 명 :

7. 첨 부 서 류 : 경력확인서 1부, 재직증명서 1부,

자격증명서 1부, 보안각서 1부

상기 용역건에 대하여 위와 같이 책임기술인을 선정하였기에 신고서를 제출합니다.

20  년  월  일

	계약상대자
	주 소 :
	상 호 :
	대 표 이 사 :	(인)
경수고속도로주식회사 대표이사 귀하

[별지서식3]

보   안   각   서

(과업수행업체 대표자용)

본인은 2023년  월  일 귀사와 계약 체결한 용역을 시행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 자의 각서로 제출합니다.

1. 본인은 본 용역을 시행함에 있어 계약서 및 과업지시서 상의 제반 보안사항을 철저히 이행할 것임은 물론 용역 과업 수행 전에 용역참여자 전원에 대하여 보안 교육을 실시하고 보안각서를 징구하여 용역 시행부서에 제출할 것임

2. 본인은 물론 당회사 직원이 보안 사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기 시켰을 경우에는 누설자가 보안 관련법규에 의거 처벌받음은 물론 당사에 대한 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것임

20  년  월  일

	소 속 :
	직 위 :
	성 명 :	(인)
경수고속도로주식회사 대표이사 귀하

[별지서식4]

보   안   각   서

(과업 책임기술인 및 참여기술인용)

본인은 2023년  월  일 귀사와 계약 체결한 용역을 시행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 자의 각서로 제출합니다.

1. 본인은 본 용역을 시행함에 있어 계약서 및 과업지시서 상의 제반 보안사항을 철저히 이행하겠으며,

2. 보안 사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기 시켰을 경우에는 보안관련 법규에 의거 처벌받음은 물론 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것임

20  년  월  일

	소 속 :
	직 위 :
	성 명 :	(인)
경수고속도로주식회사 대표이사 귀하

[별지서식5]

분야별 참여기술인 명단

분야	직책	자격종목 및 등록번호	주민등록번호	회사내직위	성명	서명	용역과업 수행내용

* 분    야

1. 건설기술진흥법 시행령 별표의 기술분야에 열거된 분야

2. 주요구조물에 대하여는 상기외에 별도 책임기술인으로 하여금 수행할 시에는 구조물명이나 공사명으로 분야를 기재

* 직   책 : 분야별에서 수행시의 책임성 정도로서 사업책임기술인, 책임기술인(분야), 참여기술인으로만 분류

* 자격종목 : 국가기술 자격법상의 자격을 기재하고 하단에 등록 번호를 기재

* 수행내용 기재 : 분야별 책임기술인 중심으로 주요업무에 대해 수행한 핵심분야를 파악할 수 있도록 기재

[별지서식6]

선 금 신 청 서

1. 계 약 번 호 :

2. 계 약 건 명 :

3. 계약 년월일 :

4. 착공 년월일 :

5. 준 공 기 한 :

6. 계 약 금 액 :

7. 선금신청비율 :

8. 선금신청금액 :

9. 잔 여 금 액 :

10. 첨 부 서 류 : 선금 사용계획서 1부, 선금 이행각서 1부,

사업자등록증 1부, 통장사본 1부, 선금 이행보증증권 1부.

상기 용역에 대하여 귀 사와 체결한 계약조건에 따라 위와 같이 선금을 신청합니다.

20  년  월  일

	계약상대자
	주 소 :
	상 호 :
	대 표 이 사 :	(인)
경수고속도로주식회사 대표이사 귀하

[별지서식7]

선 금 사 용 계 획 서

1. 총    괄

(단위:원)

비 목 별	계약금액	사용계획금액	사용계획(기간)	비고(%)
재 료 비
노 무 비
경 비
부 가 세
총 계

(＊비고 = 사용계획금액/계약금액)

2. 비목별 사용계획 (＊비목별 세부내역 별첨)

가. 재료비

(단위:원, 부가가치세 별도)

품 명	계약금액		사용계획		비고(%)
	물량	금액	물량	금액
총 계

나. 노무비

(단위:원, 부가가치세 별도)

품 명	계약금액		사용계획		비고(%)
	물량	금액	물량	금액
총 계

다. 경비

(단위:원, 부가가치세 별도)

품 명	계약금액		사용계획		비고(%)
	물량	금액	물량	금액
총 계

[별지서식8]

선 금 이 행 각 서

1. 계 약 번 호 :

2. 계 약 건 명 :

3. 계약 년월일 :

4. 착공 년월일 :

5. 준 공 기 한 :

6. 계 약 금 액 :

7. 선금신청비율 :

8. 선금신청금액 :

9. 잔 여 금 액 :

위와 같이 귀사와의 계약조건에 의한 선금을 수령함에 있어 제 규정을 성실히 준수하겠으며, 위 계약이행 이외의 타목적에 사용하지 않을 것은 물론 계약 위반 시에는 선금 보증서에 의한 보증금액으로 상환하겠음을 이에 각서 합니다.

20  년  월  일

	계약상대자
	주 소 :
	상 호 :
	대 표 이 사 :	(인)
경수고속도로주식회사 대표이사 귀하

[별지서식9]

준   공   계

1. 계 약 번 호 :

2. 용  역  명 :

3. 계 약 금 액 :

4. 계약 년월일 :

5. 착공 년월일 :

6. 준공 년월일 :

7. 준 공 기 한 :

8. 기 지 급 액 :

9. 잔 여 금 액 :

10. 첨 부 서 류 : 준공검사원 1부, 준공내역서 1부, 준공사진 1부

상기 용역건에 대하여 위와 같이 준공하였으므로 준공계를 제출합니다.

20  년  월  일

	계약상대자
	주 소 :
	상 호 :
	대 표 이 사 :	(인)
경수고속도로주식회사 대표이사 귀하

[별지서식10]

준  공  검  사  원

감독자 경유                   (인)

1. 계 약 번 호 :

2. 용  역  명 :

3. 계 약 금 액 :

4. 계약 년월일 :

5. 착공 연월일 :

6. 준 공 기 한 :

7. 준공 년월일 :

상기 용역의 도급시행에 있어서 용역전반에 걸쳐 과업지시서 및 기타 약정대로 어김없이 준공되었음을 확인하오며 만약 용역의 검사에 관하여 하자가 발견될 시는 즉시 실액 변상 또는 재시공할 것을 서약하고 이에 준공검사원을 제출합니다.

20  년  월  일

	계약상대자
	주 소 :
	상 호 :
	대 표 이 사 :	(인)
경수고속도로주식회사 대표이사 귀하

[별지서식11]

준 공 금  청 구 서

1. 계 약 번 호 :

2. 계 약 건 명 :

3. 계 약 기 간 :

4. 준공 년월일 :

5. 계 약 금 액 :

6. 기 지 급 액 :

7. 청 구 금 액 :

8. 첨 부 서 류 : 전자세금계산서 1부, 사업자등록증 1부, 통장사본 1부,

상기 계약 건이 완료됨에 따라 준공금을 청구하오니 아래 계좌에 입금하여 주시기 바랍니다.

-   아             래   -

은 행 명
계 좌 번 호
예 금 주

20  년  월  일

	계약상대자
	주 소 :
	상 호 :
	대 표 이 사 :	(인)
경수고속도로주식회사 대표이사 귀하

[별지서식12]

일 일 업 무 일 지

작성일자 : 20  .    .    .

작 성 자 : “사업책임기술인” (인)

확 인 자 :   “용역감독원”   (인)

◦ 용역명 :

◦ 공  정 : 계 획      %, 실 시      %, 대 비      %

1. 과업수행내용

금 일 실 적	명 일 계 획

2. 인력투입현황

구분	투입인력			비 고
	내업	외업	현장인부
투입인원 (당일투입/누계)
투입인원 명단

3. 특기사항

※ 장비투입 사항은 특기사항에 기재

4. 인력 투입 세부현황

투입인력 현황				투입일 현황							서명
소속	구분	성명	작업내용 (위치)	금일		익일		계(일)
				내업	외업	내업	외업	계	내업	외업
	사책			○		○		10	5	5
	분책				○		○	6	4	2
	분책				○	○		7	2	5
	분참
	분참
	분참
	분참
	기타 참여	김경수 (제외 6.6)
	기타 참여
	기타 참여	나용인 (추가 6.6)

* 투입인력 현황 : 착수계 제출 시 등록된 전체 인원을 표기를 기준으로 하며 기술인 변경 등으로 삭제된 경우 해당 성명 하단에 (제외, 제외일자) 표기하고 추가 투입된 경우 전체 현황 및 성명하단에 (추가, 추가일자)를 표기함

** 투입일 현황  : (금일) 업무일지 작성일 기준 기술자의 내·외업 투입여부(○표기)

(익일) 업무일지 작성일 기준 익일 기술자의 내·외업 투입여부(○표기)

(계) 업무일지 작성일을 포함한 기술자의 내·외업 투입 누계(단위:일)

*** 서명란에 참여기술인 서명이 없는 경우 투입인원에서 제외한다.

[별지서식13]

(   )월 업무 보고서

작성일자 : 20  .    .    .

작 성 자 : “사업책임기술인” (인)

확 인 자 :   “용역감독원”   (인)

◦ 용역명 :

1. 공정현황

계 획(%)	실 시(%)	대 비(%)	용역기간	비 고

2 추진실적 및 계획

구 분	공 종	주요 작업내용	비고
실 적 (○월)	계
	현장조사
	내구성 조사
	. . .
계 획 (○월)	계
	현장조사
	내구성조사

3. 인력 투입 실적 및 계획

구 분		실적			계획
		계	전월까지	금월
인력	합계
	내업
	외업
	작업보조원

5. 현 안 사 항

◦

6. 건 의 사 항

◦